COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 31-01-2012

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi e di recupero urbano della Piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri - Approvazione Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva. Prop. n. 19 del 30/1/2012	

L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 13:10, presso questa sede Comunale a seguito di apposito avviso diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano i Signori:

GIANASSI GIANNI	Sindaco	P	
NICCOLI IVANA	Assessore	P	
ANDORLINI MASSIMO	Assessore	P	
APPELLA ERNESTO	Assessore	P	
BANCHELLI ANDREA	Assessore	P	
CAMARDO DOMENICO	Assessore	P	
CONTI CATERINA	Assessore	P	
DROVANDI ROBERTO	Assessore	P	
MANNINI ANTONELLA	Assessore	P	
SOLDI MAURIZIO ULIVO	Assessore	P	
  
PRESENTI N.   10    -    ASSENTI N.    0

PARTECIPA alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il SEGRETARIO GENERALE,  Dott.ssa LANDI PATRIZIA.

PRESIEDE il Sindaco Sig. GIANASSI GIANNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-	con Deliberazione G.C. del 17/5/2011, n. 102, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi (CUP B97H11000550004);
-	con Deliberazione G.C. del 17/5/2011, n. 103, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di recupero urbano della Piazzetta di Via Gramsci angolo Via Alighieri (CUP B93D11000240004); 
-	con Deliberazione G.C. del 31/5/2011, n. 111, è stato incaricato il Settore Polizia Municipale e Mobilità di provvedere agli adempimenti necessari all’indizione di un’unica procedura di gara per l’affidamento dei lavori per due lotti funzionali individuati come segue: LOTTO A “Manutenzione straordinaria di Via Verdi”, LOTTO B “Recupero urbano della Piazzetta di Via Gramsci angolo Via Alighieri”, secondo i seguenti Quadri Economici:

Lotto A:

A) IMPORTO LAVORI 					
Importo dei lavori 			€	110.381,52	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	4.000,00	
TOTALE LAVORI			€	114.381,52	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
IVA 20%	€	22.876,30			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	2.287,63			
Per contributo Autorità		30,00			
Per imprevisti e arrotondamenti	€	424,55			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	25.618,48	€	25.618,48	
TOTALE COMPLESSIVO			€	140.000,00	
Lotto B:

A) IMPORTO LAVORI 					
Importo dei lavori			€	 53.800,61	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  			€	1.614,02	
    TOTALE LAVORI			€	55.414,63	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE					
IVA 10%                           	€	5.541,46			
Oneri per Progettazione e assistenza tecnica Direzione lavori		€	 7.363,20			
Per contributo Autorità	€	30,00			
Oneri per Collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera	€	624,00			
Per imprevisti e arrotondamenti		€	2.491,13			
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 16.049,79	€	 16.049,79	
TOTALE COMPLESSIVO			€	  71.464,42	

-	con Determinazione del Dirigente della Polizia Municipale e Mobilità n. 247 del 19/9/2011 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all’impresa Velardo Costruzioni S.r.l. di Firenze con un ribasso del 16,18%;
-	con Determinazione del Dirigente della Polizia Municipale e Mobilità n. 985 del 4/10/2011, è stato approvato l’impegno di spesa per i lavori di cui all’oggetto, nonché la variazione del quadro economico in conseguenza del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, come segue:

Lotto A:

A) IMPORTO LAVORI 					
Importo dei lavori (al netto del ribasso)			€	92.131,93	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	4.000,00	
TOTALE LAVORI			€	96.131,93	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
IVA 21% sui lavori 	€	20.187,71			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	2.287,63			
Per contributo Autorità Contratti Pubblici		112,50			
Per imprevisti e arrotondamenti	€	21.280,23			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	43.868,07	€	43.868,07	
TOTALE COMPLESSIVO			€	140.000,00	
Lotto B:

A) IMPORTO LAVORI 					
Importo dei lavori (al netto del ribasso)			€	 45.489,69	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  			€	1.614,02	
    TOTALE LAVORI			€	47.103,71	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE					
IVA 10% sui lavori                           	€	4.710,37			
Oneri per Progettazione e assistenza tecnica Direzione lavori 		€	 6.136,00			
IVA 21% su Oneri Progettazione e assistenza D.L.	€	1.288,56			
Oneri per Collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera	€	520,00			
IVA 21% su Oneri Collaudo	€	109,20			
Per contributo Autorità Contratti Pubblici	€	112,50			
Per imprevisti e arrotondamenti		€	11.484,08			
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	24.360,71 	€	 24.360,71	
TOTALE COMPLESSIVO			€	  71.464,42	

RICHIAMATO il Contratto di appalto Rep. N. 20321 del 25/10/2011, registrato a Firenze 2 il 9/11/2011 al N. 50, con cui l’impresa Velardo Costruzioni S.r.l. di Firenze ha assunto l’esecuzione dei lavori in oggetto, consegnati alla ditta in data 26/10/2011;

CONSTATATO che la D.L. ha rilevato la necessità di elaborare una perizia suppletiva e di variante e di variata distribuzione di spesa, determinata da varianti ai lavori previsti dal progetto finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, ai sensi dell’art. 132, comma 3 del D. Lgs. 163/2006;

VISTI  gli elaborati tecnici predisposti dalla D.L. relativi alla perizia consistenti in:
-	Relazione Tecnica;
-	Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 
-	Computo Metrico 
-	Quadro Comparativo;
-	Schema Atto di Sottomissione;

VISTA in particolare la relazione tecnica redatta a tal fine dalla D.L., dalla quale si evince che le opere oggetto della presente perizia sono:
•	Intervento per rifacimento del tratto di tubazione posta al centro della piazzetta di Via Gramsci, per il collegamento delle caditoie nell’area pedonale e smaltimento delle acque piovane, nonché sostituzione delle relative caditoie ed allacciamento alla tubazione esistente;
•	Realizzazione di zanella in porfido lungo la Via Gramsci nel tratto lungo la piazzetta;
•	Fornitura e posa in opera di chiusini con telaio metallico da riempire in pietra;
•	Realizzazione di raccordo del marciapiede all’angolo tra la piazzetta su Via Gramsci e Via Alighieri;
•	Realizzazione di bocciardatura sulla superficie in pietra delle strisce trasversali posate in Via Verdi;
•	Maggior costo per adeguamento dello strato di allettamento alla posa della pavimentazione in Via Verdi;
•	Taglio della pavimentazione bituminosa al confine delle aree di cantiere;

ATTESO che per la contabilizzazione di tali opere, si è resa necessaria l’applicazione di N. 22 Nuovi Prezzi, ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006;

RILEVATO che la D.L. ha provveduto a contattare l’impresa appaltatrice Velardo Costruzioni S.r.l. di Firenze, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori, per i quali è stato sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi in data 23/1/2012 e sui quali viene applicato il ribasso contrattuale del 16,18%;

PRESO ATTO che, come risulta dall’allegato schema di atto di sottomissione, il termine contrattuale ai fini dell’ultimazione dei lavori non sarà prorogato rimanendo quindi invariato rispetto al contratto principale ovvero previsto per l’11/3/2012;

RITENUTO necessario, contestualmente alla perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa, approvare anche il nuovo Quadro Economico delle opere modificato come segue:

Lotto A:

A) IMPORTO LAVORI 					
Importo dei lavori (al netto del ribasso)			€	92.131,93	
Importo maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso)			€	2.985,28	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	4.000,00	
TOTALE LAVORI			€	99.117,21	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
IVA 21% sui lavori 	€	20.814,61			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	2.358,86			
Per contributo Autorità Contratti Pubblici		112,50			
Per imprevisti e arrotondamenti	€	17.596,82			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	40.882,79	€	40.882,79	
TOTALE COMPLESSIVO			€	140.000,00	

Lotto B:

A) IMPORTO LAVORI 					
Importo dei lavori (al netto del ribasso)			€	 45.489,69	
Importo maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso)			€	8.462,30	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  			€	1.614,02	
    TOTALE LAVORI			€	55.566,01	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE					
IVA 10% sui lavori                           	€	5.556,60			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	733,72			
Oneri per Progettazione e assistenza tecnica Direzione lavori		€	 6.136,00			
IVA 21% su Oneri Progettazione e assistenza D.L.	€	1.288,56			
Oneri per Collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera	€	520,00			
IVA 21% su Oneri Collaudo	€	109,20			
Per contributo Autorità Contratti Pubblici	€	112,50			
Per imprevisti e arrotondamenti		€	1.441,83			
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	15.898,41	€	 15.898,41	
TOTALE COMPLESSIVO			€	  71.464,42	

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTAZIONE unanime, palese e favorevole

DELIBERA

1.	Di approvare la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi e di recupero urbano della Piazzetta di Via Gramsci angolo Via Alighieri, per un maggior importo di lavori (al netto del ribasso del 16,18%) pari ad € 2.985,28 oltre IVA al 21% per i lavori del Lotto A, ed € 8.462,30 oltre IVA al 10% per i lavori del Lotto B, per complessivi € 12.920,72, costituita dai seguenti elaborati:
-	Relazione Tecnica;
-	Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 
-	Computo Metrico;
-	Quadro Comparativo;
-	Schema Atto di Sottomissione;

2.	Di approvare il nuovo Quadro Economico delle opere come di seguito riportato:

Lotto A:

A) IMPORTO LAVORI 					
Importo dei lavori (al netto del ribasso)			€	92.131,93	
Importo maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso)			€	2.985,28	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	4.000,00	
TOTALE LAVORI			€	99.117,21	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
IVA 21% sui lavori 	€	20.814,61			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	2.358,86			
Per contributo Autorità Contratti Pubblici		112,50			
Per imprevisti e arrotondamenti	€	17.596,82			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	40.882,79	€	40.882,79	
TOTALE COMPLESSIVO			€	140.000,00	

Lotto B:

A) IMPORTO LAVORI 					
Importo dei lavori (al netto del ribasso)			€	 45.489,69	
Importo maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso)			€	8.462,30	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  			€	1.614,02	
    TOTALE LAVORI			€	55.566,01	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE					
IVA 10% sui lavori                           	€	5.556,60			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	733,72			
Oneri per Progettazione e assistenza tecnica Direzione lavori		€	 6.136,00			
IVA 21% su Oneri Progettazione e assistenza D.L.	€	1.288,56			
Oneri per Collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera	€	520,00			
IVA 21% su Oneri Collaudo	€	109,20			
Per contributo Autorità Contratti Pubblici	€	112,50			
Per imprevisti e arrotondamenti		€	1.441,83			
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	15.898,41	€	 15.898,41	
TOTALE COMPLESSIVO			€	  71.464,42	
					
3.	Di dare atto che la spesa complessiva dell’opera trova copertura finanziaria nel modo seguente:
-	€ 140.000,00 relative al Lotto A, sul Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, cap. PEG. 74020/1 (Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento strade cittadine), RR.PP. 2011;
-	€ 71.464,42 relative al Lotto B, sul Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, cap. PEG 74020/05 (Riqualificazione strade del centro cittadino), RR.PP. 2009 e 2011;

4.	Di rimandare ad un successivo atto dirigenziale l’assunzione dell’impegno di spesa per i maggiori lavori derivanti dall’approvazione della presente perizia, nonché per i conseguenti maggiori oneri di cui all’Art. 92 del D. Lgs. 163/2006.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.                                                                     

PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi e di recupero urbano della Piazzetta di Via Gramsci angolo Via Dante Alighieri - Approvazione Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva. Prop. n. 19 del 30/1/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA', esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 31-01-2012

	IL DIRIGENTE DEL
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'	
	f.to BAGNOLI PAOLO	

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere Favorevole, in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE.

si dà atto che la somma di € 140.000,00 relativa al lotto A trova copertura finanziaria sul titolo 2^ Funzione 08 Servizio 01 intervento 01 capitolo Peg 74020/1 - rr.pp. 2011 O.P. 200/2011-  e la somma di 
€ 71.464,42 relativa al lotto B sul titolo 2^ funzione 08 Servizio 01 intervento 01 capitolo Peg 74020/5 rr.pp. 2009 e 2011 OO.PP: 154/2009 e 248/2011

Sesto Fiorentino, 31-01-2012

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI	
	f.to AMODEI GIUSEPPE	

===================================================================

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 	             IL SEGRETARIO GENERALE	
f.to GIANASSI GIANNI	            f.to LANDI PATRIZIA	

===================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,	IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	
		
===================================================================

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal ____________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registrato al n. __________

===================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________, undicesimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,  01-02-2012	

IL SEGRETARIO GENERALE	
	f.to LANDI PATRIZIA
	
===================================================================