COPIA

REGISTRO GENERALE N. 521 DEL 10-05-2012

DETERMINAZIONE 

N. 61 DEL 10-05-2012
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di tratto del "Percorso ciclo-pedonale Sesto Fiorentino - Campi Bisenzio e Centro Servizi del Parco" - Lotto 0 (CUP: B97H09001330002); approvazione perizia di variante e variata distribuzione di spesa ai sensi del D. Lgs. 163/2006 art. 132, c. 3.	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 142 (R.G. n. 1350) del 16/12/2011 con cui sono stati affidati alla ditta Del Debbio S.p.A. di Lucca i lavori di manutenzione straordinaria di tratto del “Percorso ciclo-pedonale Sesto Fiorentino - Campi Bisenzio e Centro Servizi del Parco” – Lotto 0 (CUP: B97H09001330002), per un importo di lavori di € 38.400,00 con un ribasso del 1,77%, secondo il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO LAVORI 					
Per opere 			€	38.400,00	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	500,00	
TOTALE LAVORI			€	38.900,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
IVA 21%	€	8.169,00			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 – 2%	€	791,80			
Per imprevisti e arrotondamenti	€	1.239,20			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10.200,00			
TOTALE COMPLESSIVO			€	49.100,00	

DATO ATTO che l’opera è finanziata sul titolo II, funzione 9, servizio 6, intervento 1, cap. PEG 81061 (Opere connesse al Parco della Piana) del Bilancio del corrente esercizio, RR.PP. 2010; 

RICHIAMATO il Contratto di appalto del 21/12/2011, con cui l’impresa Del Debbio S.p.A. di Lucca ha assunto l’esecuzione dei lavori in oggetto, consegnati alla ditta il giorno stesso;
CONSTATATO che, durante l’esecuzione dei lavori, la D.L. ha rilevato la necessità di elaborare una variante, ai sensi dell’art. 132, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, finalizzata al suo miglioramento ed alla sua funzionalità, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, che non comportano una variazione (né in aumento, né in diminuzione) dell’importo contrattuale, né tantomeno una variazione del quadro economico;
VISTI  gli elaborati tecnici predisposti a tal fine dalla D.L. consistenti in:
-	Relazione Tecnica;
-	Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 
-	Computo Metrico; 
-	Quadro Comparativo;

VISTA in particolare la relazione tecnica redatta dalla D.L. dalla quale si evince che è stato convenuto di realizzare un tratto di lunghezza inferiore di pista ciclabile in asfalto ecologico ed effettuare invece la preparazione del fondo per l’intervento di completamento in via di Mollaia e nei tratti subito adiacenti, sistemazione propedeutica al prossimo intervento di completamento della pista;

ATTESO che per la contabilizzazione di tali opere, si è resa necessaria l’applicazione di n. 1 Nuovo Prezzo, ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006;

RILEVATO che la D.L. ha provveduto a contattare l’impresa appaltatrice Del Debbio S.p.A. di Lucca, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori come da variante, per i quali è stato sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi in data 18/4/2012 e sui quali viene applicato il ribasso contrattuale del 1,77%;

PRESO ATTO che il termine contrattuale ai fini dell’ultimazione dei lavori non sarà prorogato rimanendo quindi invariato rispetto al contratto ovvero previsto per il 17/6/2012;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è l’Arch. Cristiana Cristiani, Responsabile del Servizio Mobilità;

VISTA la Deliberazione C.C. del 14/3/2012, n. 22, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 ed i relativi allegati;
 
VISTA la Deliberazione G.C. del 2/5/2012, n. 74, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2012;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 24 giugno 2010, n. 9, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in materia;

DETERMINA

1)	DI APPROVARE la perizia di variante e variata distribuzione di spesa dei lavori di manutenzione straordinaria di tratto del “Percorso ciclo-pedonale Sesto Fiorentino – Campi Bisenzio e Centro Servizi del Parco” – Lotto 0, che non comporta una variazione (né in aumento, né in diminuzione) dell’importo contrattuale, né tantomeno una variazione del quadro economico;
2)	DI APPROVARE in particolare i seguenti elaborati allegati alla presente determinazione:
-	Relazione Tecnica;
-	Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 
-	Computo Metrico;
-	Quadro Comparativo;

3)	DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Servizi Finanziari per i necessari adempimenti.

Sesto Fiorentino, 10-05-2012

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to BAGNOLI PAOLO	

IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di tratto del "Percorso ciclo-pedonale Sesto Fiorentino - Campi Bisenzio e Centro Servizi del Parco" - Lotto 0 (CUP: B97H09001330002); approvazione perizia di variante e variata distribuzione di spesa ai sensi del D. Lgs. 163/2006 art. 132, c. 3.	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 17-05-2012

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI	
	f.to AMODEI GIUSEPPE