COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1298 DEL 11-12-2012

DETERMINAZIONE 

N. 185 DEL 11-12-2012
U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Ulteriore concessione di proroga dei termini contrattuali -Lavori di Costruzione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino -	

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 83 del 26.01.2010 sono stati affidati  all’impresa  De.Sa.Ma Costruzioni S.r.l. di Marigliano (NA) i lavori di realizzazione della nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino; 

- in data 04.05.2010 è stato stipulato il contratto di appalto – repertorio n. 20278 registrato a Firenze  Atti Pubblici in data 18.05.2010 al n. 18, nel quale veniva stabilito un termine per l’esecuzione dei lavori di 540 (cinquecentoquaranta) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori;

- la consegna dei lavori di cui sopra è avvenuta in data 16.06.2010 e pertanto il termine stabilito per la fine dei lavori scadeva il giorno 08.12.2011; 

-Con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete  n. 183 del 07.12.2011 iscritta al n. 1276 R.G. venne concessa una proroga di 90 giorni al termine contrattuale  ponendo la nuova scadenza alla data del 07.03.2012;

- con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete n. 44 del 13.06.2012 iscritta al n. 314 R.G. venne approvata una perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto e concessa una proroga di giorni 90;

- con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a rete n. 77 del 13.06.2012 iscritta al n. 681 R.G. in seguito ad una sospensione lavori in data 01.03.2012 ed una ripresa lavori in data 19.04.2012 venne approvata una modifica allo Schema di Atto di Sottomissione ed Elenco Nuovi Prezzi fissando la nuova scadenza contrattuale al giorno 24.07.2012;

- in data 13.06.2012 venne sottoscritto l’Atto di Sottomissione Repertorio n. 20338 registrato a Firenze  Atti Pubblici in data 21.06.2012 al n. 27;

- con determinazione n. 102 del 24.07.2012 (iscritta al n. 813 R.G.) veniva concessa  all’impresa De.Sa.Ma Costruzioni S.r.l. di Marigliano (NA) una proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale previsto per il 24/07/2012- ponendo la nuova scadenza per l’ ultimazione dei lavori di realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino alla data 22.10.2012;

- con determinazione della U.O.A. lavori Pubblici e Servizi a Rete  n. 151 del 19.10.2012 (iscritta al n. 1047 R.G.) venne approvata una seconda perizia di variante e suppletiva e concessa una proroga al termine contrattuale di giorni 50 (cinquanta) e pertanto la scadenza per l’ultimazione lavori stabilita al giorno 11.12.2012; 

- in data 30 Ottobre 2012  è stato sottoscritto l’Atto di Sottomissione Repertorio n. 20344 registrato a Firenze Atti Pubblici in data 09.11.2012 al n. 48;

Ciò premesso:

VISTA  la Relazione del RUP Arch. Michele Lombardi  in data 11.12.2012 allegata quale parte integrante del presente atto, con la quale fa presente che:

-Con lettera del 20.11.2012 acquisita al protocollo al n. 52792 del 21.11.2012 l’appaltatore dei lavori ha richiesto una ulteriore proroga sui tempi contrattuali in scadenza il giorno 11.12.2012;
- Allo stato attuale le opere, il cui importo complessivo ammonta a circa 900.000 euro, sono in avanzato stato di esecuzione, con un importo dei lavori già eseguiti pari a circa 600.000 euro, oltre a lavori per circa 150.000 euro in fase di contabilizzazione.
- Il RUP ha più volte richiamato l’impresa al rispetto della tempistica contrattuale evidenziando l’urgenza di questa Amministrazione appaltatrice di procedere con le forniture degli arredi della sala consiliare e a tal fine ha richiesto all’impresa, con nota del 03.12.2012 Prot. n. 54684,  come condizione imprescindibile per la concessione di una eventuale proroga la consegna dei locali della Sala ovale entro e non oltre il 31.12 p.v.
- L’appaltatore con nota del 11.12.2012 (prot. n. 56230) pur confermando la richiesta di proroga (per giorni 60 - sessanta) si è dichiarato disponibile a consegnare entro il 10.01.2013  conclusi e collaudabili staticamente i locali della sala ovale e della hall di ingresso e a ripiegare le aree di cantiere nella zona tergale del fabbricato, lasciando sgombere e pulite le aree esterne verso la piazza;
Tali condizioni permetterebbero di fatto di sezionare il cantiere in due aree distinte e separate:
-	la sala e la hall, con ingresso da piazza Vittorio Veneto, da consegnare all’impresa appaltatrice della fornitura degli arredi;
-	la zona tergale degli uffici posti al piano terreno e superiori, con ingresso dal Largo V Maggio - cortile ex biblioteca, ancora in consegna all’impresa De.Sa.Ma.Costruzioni srl  per il completamento dell’appalto principale;
- Considerato che attualmente è in fase di affidamento l’appalto per la fornitura degli arredi per il completamento della sala ovale e della hall di ingresso e che l’aggiudicazione definitiva dovrebbe avvenire nel mese di gennaio 2013 e che l’agibilità della Sala non potrà essere acquisita se non dopo la conclusione delle opere di completamento e di arredo la cui durata presunta è di 105 (centocinque) giorni;
-  Sentito anche il Direttore dei Lavori principali Arch. Chimenti della Società Sin.ter srl di Firenze  che ha dichiarato la congruità della tempistica ipotizzata dalla Impresa De.Sa.Ma Costruzioni  srl. e la fattibilità dell’organizzazione di cantiere rappresentata, il RUP propone di stabilire come vincolanti e improrogabili gli impegni assunti dall’impresa per la consegna dei locali della Sala ovale della hall di ingresso e di concedere a tali condizioni la proroga di giorni 60 (sessanta) richiesta dell’appaltatore;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto esposto dalla Direzione Lavori e dal RUP di accogliere la richiesta dell’Impresa De.Sa.Ma Costruzioni S.r.l. di Marigliano (NA) considerando ragionevole ed opportuna una proroga ai termini contrattuali di 60(sessanta) giorni naturali e consecutivi a condizione che l’impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che tale proroga non comporta aumento contrattuale né aggravio di oneri economici per l’Amministrazione Comunale;

VISTO:

- il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta   l’incarico di Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

- l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

- il D.Lgs. 163/2006 e sm.i.;

RICHIAMATI:
- l’art. 159 del D.P.R. 207/2010 e l’art. 26 del D.M. 145/2000

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto,

1)	Di stabilire come vincolanti ed improrogabili gli impegni assunti dall’Impresa DE.SA.MA Costruzioni srl di Marigliano  per la consegna dei Locali della Sala Ovale e della Hall di ingresso  e di concedere a tali condizioni, una ulteriore proroga di  60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale previsto per il giorno 11.12.2012- ponendo la nuova scadenza  al giorno 09.02.2013 a condizione che l’Impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

2)	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Sesto Fiorentino, 11-12-2012

	IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to DABIZZI RITA	

IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: Ulteriore concessione di proroga dei termini contrattuali -Lavori di Costruzione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino -	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente determinazione non assume rilevanza sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 12-12-2012

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI	
	f.to AMODEI GIUSEPPE