COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1389 DEL 10-12-2014

DETERMINAZIONE 

N. 122 DEL 10-12-2014
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un collegamento stradale fra Via della Querciola e la S.P. 5bis Perfetti Ricasoli - Mezzana (lotto 1) - Approvazione lavorazioni in eccedenza ai sensi dell'art. 228 DPR 207/2010.- CIG. 45053658CE - CUP B91B12000940004	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2014/2016;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 26 /09/2013 con la quale il nostro comune ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 modificato dall’art. 9 del DL 31 agosto 2013 n. 102;
-il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/11/2013 con il quale il comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l’anno 2014;
DATO ATTO che - la spesa afferente il presente provvedimento è stata oggetto del riaccertamento straordinario approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 29/4/2014 e successivamente reimputata al bilancio 2014 con atto del Consiglio Comunale n.43 del 20/05/2014;
PREMESSO che:
-	con deliberazione della Giunta Comunale n° 106 del 19/06/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del Lotto 1 dell’opera “collegamento stradale fra Via della Querciola e la S.P. 5bis Perfetti Ricasoli – Mezzana”;
-	a seguito di procedura di gara con determinazione dirigenziale n° 263 del 20/11/2012 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa F.lli Sallei di Pescia (PT) con un ribasso pari al 24,89%;
-	in data 12/02/2013 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto repertorio Rep. n. 20354, Registrato a Firenze (Atti Pubblici) il 28/02/2013 al n. 12 sottoscritto fra l’Amministrazione Comunale e l’impresa “F.lli Sallei S.r.L.” di Pescia (PT) per un importo contrattuale pari a € 311.718,33 di cui € 294.718,33 per lavori ed € 17.000,00 per oneri della sicurezza.
-	in data 06/08/2013 la Giunta Comunale con proprio atto n° 122 ha approvato la Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva e successivamente con determina dirigenziale n.936 del 21/08/2013 è stato assunto il relativo impegno di spesa, con il seguente nuovo quadro economico dell’opera:

A) IMPORTO LAVORI 					
Per realizzazione nuova strada			€	294.718,33	
Importo maggiori lavori perizia			€	57.131,19	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	17.000,00	
TOTALE LAVORI			€	368.849,52	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
IVA 10%	€	36.884,95			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 – 2%	€	8.187,65			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 maggiori lavori  perizia – 2%	€	1.521,27			
Per incarico geologo e indagini geologiche	€	4.620,00			
Per indagini archeologiche preliminari	€	4.598,00			
Per incarico prog. strutturale, relaz. geotecnica e assistenza D.L.	€	6.112,50			
Per incarico progettazione illuminazione	€	3.146,00			
Per espropri e occupazioni temporanee	€	64.860,00			
Per assicurazione ex art. 270 DPR 207/2010	€	469,80			
Per assicurazione ex art. 49 c. 7 DPR 207/2010	€	800,00			
Per contributo AVCP	€	225,00			
Per attivazione nuova fornitura per illuminazione pubblica in via Nenni	€	1.202,23			
Per imprevisti e arrotondamenti	€	38.523,08			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	171.150,48	€	171.150,48	
TOTALE COMPLESSIVO			€	540.000,00	

VISTA la relazione per lavorazioni in eccedenza ex art. 228 DPR 207/2010 del 28/10/2014 redatta dal Direttore Lavori Ing. Francesco Giannini nel corso delle operazioni di collaudo, allegata al presente atto, dalla quale si evince  che: 
-durante la redazione del 4° SAL (corrispondente al finale) e del conto finale, a seguito dell'effettuazione delle misure delle quantità e lavorazioni effettivamente eseguite, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, è emerso che per effetto dell'esecuzione di quantità in più rispetto a quanto indicato nel computo metrico di progetto e di perizia – non prevedibili – e  di alcune lavorazioni non previste in progetto ma ordinate alla ditta F.lli Sallei e indispensabili al completamento dell'opera secondo le regole dell'arte, si è verificato un aumento dell'importo lavori per complessivi netti € 22.366,21 oneri per la sicurezza inclusi;
- le opere in oggetto non figurano nel contratto iniziale, ma si configurano come divenute necessarie per l'esecuzione dell'opera a seguito di circostanze impreviste e, oltre ad essere fondamentali e necessarie per il completamento dei lavori secondo le regole dell’arte, sono anche finalizzate al miglioramento qualitativo e funzionale dell’opera nel suo complesso, anche in termini di sicurezza stradale;
- vi sono alcune altre voci che risultano variate nel quadro economico dell’opera realizzata in relazione ad alcune economie derivanti dai minori costi per l’acquisizione delle aree (era stata prevista una spesa di € 64.860,00 ed invece il costo effettivo ammonta a € 55.462,50) e per l’assicurazione ex art. 49 c.7 DPR 207/2010, mai stipulata, per una spesa di € 800,00  nonché in riferimento ad un lievissimo incremento per l’attivazione della fornitura per l’illuminazione, pari a € 13,04;
- l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 936 del 21/08/2013 citata in premessa, in quanto l'importo complessivo dell'opera non viene variato;
VISTO il parere del RUP Arch. Cristiana Cristiani, dipendente del Settore Servizi per il Territorio in data 05/11/2014 allegato al presente atto;
CONSIDERATO che si tratta di lavorazioni di importo complessivo di modesta entità rispetto all'importo totale dell'appalto, meritevoli di collaudo e indispensabili per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, non tecnicamente ed economicamente separabili dall'appalto iniziale e non determinanti variazioni sostanziali al progetto esecutivo ed all’opera stessa; per altro tali lavorazioni sono state ordinate all'impresa esecutrice F.lli Sallei, anche se non formalmente preventivamente autorizzate, vista l'urgenza di ultimare i lavori;
VISTI l’art. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs 165/2001, l’art 107 e 183 del D.Lgs 267/2000, nonché lo Statuto Comunale e accertata la propria competenza in merito;
RICHIAMATO  il decreto del Sindaco n° 34 del 29/9/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente del Settore Sviluppo del Territorio;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 1), del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di cui al presente atto è l’Arch. Cristiana Cristiani dipendente del Settore Sviluppo del Territorio;
Tutto ciò premesso:
D E T E R M I N A
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, la relazione redatta dal Direttore Lavori Ing. Francesco Giannini, per lavorazioni in eccedenza ex art. 228 DPR 207/2010 del 29/01/2013 per l'importo complessivo di € 14.865,70 oneri per la sicurezza inclusi ordinate all'impresa aggiudicataria F.lli Sallei di Pescia (PT);
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa, ridefinito come sotto riportato:

A) IMPORTO LAVORI 					
Per realizzazione nuova strada			€	294.718,33	
Importo maggiori lavori perizia			€	57.131,19	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	17.000,00	
Lavorazioni in eccedenza ex art. 228 DPR 207/2010 (compresi oo.ss.)						€		22.366,21	
TOTALE LAVORI			€	391.215,73	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
IVA 10%	€	39.121,57			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 – 2%	€	8.187,65			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 maggiori lavori  perizia – 2%	€	1.521,27			
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 su lavorazioni in eccedenza – 2%		€		447,32					
Per incarico geologo e indagini geologiche	€	4.620,00			
Per indagini archeologiche preliminari	€	4.598,00			
Per incarico prog. strutturale, relaz. geotecnica e assistenza D.L.	€	6.112,50			
Per incarico progettazione illuminazione	€	3.146,00				
Per espropri e occupazioni temporanee	€	55.462,50				
Per assicurazione ex art. 270 DPR 207/2010	€	469,80			
Per contributo AVCP	€	225,00			
Per attivazione nuova fornitura per illuminazione pubblica in via Nenni	€	1.215,27			
Per imprevisti e arrotondamenti	€	23.657,39			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	148.784,27	€	148.784,27	
TOTALE COMPLESSIVO			€	540.000,00	
					
4. di imputare la somma complessiva di € 24.602,83 di cui € 22.366,21 per lavori ed € 2.236,62  per IVA 10% oltre € 447,32 per fondo art. 92 D. Lgs. 163/06 sul capitolo 74040/1 - O.P. 148/2010. – a valere sul Bilancio 2015;
5. di dare atto che le obbligazioni giuridiche andranno a scadenza  il 31.12.2015;
6. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
7. di dare atto che il RUP è l’Arch. Cristiana Cristiani dipendente del Settore Sviluppo del Territorio.

Sesto Fiorentino, 10-12-2014

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to GENTILI LUCA	

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE 
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un collegamento stradale fra Via della Querciola e la S.P. 5bis Perfetti Ricasoli - Mezzana (lotto 1) - Approvazione lavorazioni in eccedenza ai sensi dell'art. 228 DPR 207/2010.- CIG. 45053658CE - CUP B91B12000940004	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo	

Impegno
2015 / 141	lavori di realizzazione di un collegamento stradale fra via della Querciola e la S.P. Perfetti Ricasoli (lotto 1) - Approvazione lavorazioni in eccedenza ai sensi dell'art. 228 DPR 207/2010 - affidamento impresa F.lli Sallei srl - Operazione: Inserimento

PEG: 74040/1     PIANO FIN: 2.02.01.09.012,   MISS/PROG: 10.05
Reimpiego somme per realizzazione collegamento via  della Querciola/Perfetti-Ricasoli	11/12/2014	24.602,83	

Impegno
2015 / 142	lavori di realizzazione di un collegamento stradale fra via della Querciola e la S.P. Perfetti Ricasoli (lotto 1) - Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su lavorazioni in eccedenza ai sensi dell'art. 228 DPR 207/2010 - affidamento impresa F.lli Sallei srl - Operazione: Inserimento

PEG: 74040/1     PIANO FIN: 2.02.01.09.012,   MISS/PROG: 10.05
Reimpiego somme per realizzazione collegamento via  della Querciola/Perfetti-Ricasoli	11/12/2014	447,32	

Totale Accertato	0,00	
Totale Sub Accertato	0,00	
Totale Impegnato	25.050,15	
Totale Sub Impegnato	0,00	
Totale Liquidato	0,00	

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 11-12-2014

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE	
	f.to GENNAI STEFANO